[별표 3]

석면해체작업 감리인 평가기준 및 평가내용(제10조 관련)

항 목	세 부 항 목		세 세 항 목		배 점	득 점
합 계					100
A 기술인력 및 시설·장비 보유현황	계				20
	A.1.	기술인력, 시설 및 장비보유 현황과 보고체계의 적정성	A.1.1.	감리인 등록기준 유지 확인	15
			A.1.2.	감리인 등록보고 및 평가자료 제출의 적절성 (석면관리 종합정보망)	5
B 업무수행체계	계				70
	B.1.	감리업무를 위한 조직관리 체계 확립	소 계		10
			B.1.1.	국제표준규격(ISO) 획득에 의한 운영관리	5
			B.1.2.	조직관리체계 내부계획 수립 및 이행 확인	5
	B.2.	감리업무 수행체계 및 감리완료 보고서 작성의 적절성	소 계		60
			B.2.1.	석면의 비산 정도 및 공기 중 석면농도 측정계획 검토 및 이행 확인	10
			B.2.2.	석면해체·제거작업 관련 계획 검토 및 작업 수행 감리의 적절성	25
			B.2.3.	일별 감리 업무수행의 적절성	5
			B.2.4.	근로자 보호 조치, 작업 안내 계획 검토와 이행 확인	5
			B.2.5.	석면 함유 물질 처리 계획 검토 및 이행 확인	5
			B.2.6.	석면해체작업감리 배치 및 수행계획 수립의 적절성	5
			B.2.7.	석면해체작업 감리완료보고서 작성·보고의 적절성	5
C 업무수행성과	계				10
	C.1.	감리실적 및 행정처분 이력	C.1.1.	감리실적	5
			C.1.2.	행정처분이력	5
합 계					100

※ ‘실내작업’이란 석면해체작업장에 음압설비와 밀폐시설이 정상적으로 가동·유지되도록 ‘석면해체·제거작업 계획서’에 반영된 작업장이며, 이외 작업장은 실외작업으로 한다.

A. 기술인력 및 시설·장비 보유현황

A.1. 기술인력, 시설 및 장비보유 현황과 보고체계의 적정성

A.1.1. 감리인 등록기준 유지 확인

A.1.1.1. 확인기준	세부 평가 항목 (총 배점 : 12)	평가 결과
인력·시설·장비 확보·유지 현황	인력 확보현황이 등록기준을 준수하는 경우	□ 6
	시설 확보현황이 등록기준을 준수하는 경우	□ 2
	장비 확보현황이 등록기준을 준수하는 경우	□ 4
평가 취지 및 근거
○ 감리인은 인력·시설·장비를 적절히 유지하여야 한다. (석면안전관리법 시행령 별표 3의2 준수)

A.1.1.2. 확인기준	세부 평가 항목 (총 배점 : 3)	평가 결과
법정 보수교육 이수 여부	소속 감리원이 보수교육을 이수한 경우	□ 3
평가 취지 및 근거
○ 감리인에 소속된 감리원은 교육 수료일을 기준으로 매 3년이 되는 날의 전후 6개월 이내에 보수교육을 받아야 한다. (환경부 고시 제2020-84호 「석면해체작업 감리인 기준」 제6조3항 준수) ※ 단, 2012년부터 2013년에 교육을 수료한 자는 2019년 12월 31일까지, 2014년부터 2015년까지 교육을 수료한 자는 2020년 12월 31일까지, 2016년부터 2018년 6월 30일까지 교육을 수료한 자는 2021년 12월 31일까지 제9조 제4항에 따른 보수교육을 이수하여야 한다.

A.1.2. 감리인 등록보고 및 평가자료 제출의 적절성(석면관리 종합정보망)

A.1.2.1. 확인기준	세부 평가 항목 (총 배점 : 5)	평가 결과
감리인 등록·유지에 관한 보고 및 평가자료 제출 확인	감리인 등록·유지 현황 보고체계의 적절성	□ 2
	평가자료 제출의 적절성	□ 3
평가 취지 및 근거
○ 감리인은 자격·인력·시설·장비 현황을 석면관리 종합정보망(이하 “정보망”이라 한다)에 보고하여야 한다. ○ 평가는 석면해체작업감리인 지정·변경지정 신고서, 석면해체작업 감리완료보고서와 그 첨부서류 일체를 기반으로 하며 첨부서류는 다음과 같다. - 석면해체작업감리인 지정 신고서 첨부서류(석면안전관리법 시행규칙 제41조의2제1항 준수) · 석면조사 결과서 사본 · 석면해체·제거작업 신고서 사본 · 석면해체·제거작업 계획서 사본 · 감리용역계약서 사본 · 석면해체작업감리인, 석면해체·제거업자, 석면조사기관, 법 제28조제2항에 따른 석면의 비산 정도 측정기관, 「산업안전보건법」제124조제2항에 따른 공기 중 석면농도를 측정하는 자의 법인 등기사항증명서 또는 사업자 등록증 · 감리 업무를 직접 수행하는 인력의 재직증명서 및 근무 사실을 확인할 수 있는 서류(국민연금·국민건강보험·고용보험 또는 산업재해보상보험 중 하나의 가입증명서를 말한다) - 석면해체작업감리인 변경지정 신고서 첨부서류는 석면안전관리법 시행규칙 제41조의2제2항에 따른다. - 석면해체작업 감리완료보고서 첨부서류 (고시「석면해체작업 감리인 기준」제5조 1항 준수) · 석면해체·제거 결과보고서(석면해체·제거 작업의 착수 전, 준비작업, 진행, 완료 등 각 단계별로 현장상황을 확인할 수 있는 사진을 포함) · 석면 잔재물이 잔류하지 않음을 확인한 자료(일시, 확인자, 현장 사진 등을 포함) · 폐석면(지정폐기물) 보관 또는 처리 관련 자료 사본 · 석면 비산정도 측정 결과 사본 · 공기 중 석면농도 측정 결과 사본 · 작업의 시정·중지 등을 요청한 문서의 사본 등 그 밖에 감리 업무의 수행과 관련된 서류 ○ 석면해체작업 감리완료보고서 및 그 첨부서류는 지자체에서 정보망에 올린 자료를 활용하며, 감리인은 정보망 내 평가 페이지를 확인하여 평가대상 실적에 대한 서류의 누락 여부를 확인하여야 한다. 만약 누락된 사항이 있는 경우 관할 지자체에 확인하여 해당 자료가 제출 기한 내에 정보망에 올라오도록 하여야 한다. ※ 정보망 내 자료 제출은 부적절하였지만, 평가 진행 시 해당 자료가 있는 경우 관련 세부 평가 항목 점수인 3점 중 1점만 부여한다. ※ 평가 진행 시까지 평가자료가 확인되지 않을 시 해당 자료와 관련된 모든 세부 평가 항목을 0점 처리한다.

B. 업무수행체계

B.1. 감리업무를 위한 조직관리체계 확립

B.1.1. 국제표준규격(ISO) 획득에 의한 운영관리

B.1.1.1. 확인기준	세부 평가 항목 (총 배점 : 5)	평가 결과
국제규격에 의한 조직 운영관리	국제표준규격(ISO9001:2015)을 획득한 경우	□ 5
평가 취지 및 근거
○ 감리인이 조직의 운영체계를 수립하고, 이를 위하여 국제표준규격을 획득한 경우 점수를 부여한다. ※ 석면해체·제거작업 중 민원 또는 피해 발생 사항에 대한 관할 지방자치단체 보고를 위한 절차 수립 필수

B.1.2. 조직관리체계 내부계획 수립 및 이행 확인

B.1.2.1. 확인기준	세부 평가 항목 (총 배점 : 5)	평가 결과
보고·문서관리·인력 운영에 관한 계획 수립 및 이행 확인	계획 수립 여부	□ 2
	이행 관리 확인	□ 3
평가 취지 및 근거
○ 감리인은 운영을 위한 ISO 표준규격을 취득하지 않더라도 업무분장(부서별, 개인별) 및 보고에 관한 조직 운영체계를 내부적으로 갖추어야 한다. ※ 석면해체·제거작업 중 민원 또는 피해 발생 사항에 대한 관할 지방자치단체 보고를 위한 절차 수립 필수 ○ 감리인은 감리 업무수행과 관련된 다음 문서를 적절히 관리하여야 한다. - 석면해체작업감리인 지정·변경지정 신고서 및 첨부서류 일체 - 석면해체작업 감리완료보고서 및 첨부서류 일체

B.2. 감리업무 수행체계 및 감리완료 보고서 작성의 적절성

B.2.1. 석면의 비산 정도 및 공기 중 석면농도 측정계획 검토 및 이행 확인

B.2.1.1. 확인기준	세부 평가 항목 (총 배점 : 4)	평가 결과
공기 중 석면농도 측정계획 검토 및 이행 확인	측정계획을 적절히 검토한 경우	□ 2
	측정 방법, 측정 결괏값 확인 및 관련 조치가 적절한 경우 (현장평가 시 적용 가능)	□ 2
평가 취지 및 근거
○ 감리인은 석면농도 측정기관이 수립한 측정계획이 적절한지 확인하여야 하며, 확인 사항은 다음과 같다. - 측정기관 정보(측정업체명, 주소, 연락처, 보유 장비 및 인력 현황 등) - 측정 방법 (측정자, 측정 위치 등 포함), 시료 채취 수, 분석 방법에 관한 사항 - 측정 결괏값의 보고체계 ○ 감리인은 측정 방법이 적절한지 확인하고, 측정 결괏값에 따라 적절한 조치를 취해야 한다. (석면안전관리법 제30조의4 2항 준수) ※ 계획 검토 및 측정 방법 확인 시 부적절한 사항이 있는 경우 감리인은 시정조치사항을 발주처 및 용역업체에게 문서화하여 통보하여야 한다. ※ 실외작업의 경우 석면농도측정 대상이 아니므로 실내작업일 경우만 평가한다.

B.2.1.2. 확인기준	세부 평가 항목 (총 배점 : 6)	평가 결과
		실내	실외
석면의 비산 정도 측정계획 검토 및 이행 확인	측정계획을 적절히 검토한 경우	□ 3	□ 5
	측정 방법, 측정 결괏값 확인 및 관련 조치가 적절한 경우 (현장평가 시 적용 가능)	□ 3	□ 5
평가 취지 및 근거
○ 감리인은 석면의 비산 정도 측정기관이 수립한 측정계획이 적절한지 확인하며, 확인 사항은 다음과 같다. - 측정기관 정보(측정업체명, 주소, 연락처, 보유 장비 및 인력 현황 등) - 시료 채취 시기, 시료 채취 지점선정, 시료 채취와 분석 방법에 관한 사항 - 측정 결괏값의 보고체계 ○ 감리인은 측정 방법이 적절한지 확인하고, 측정 결괏값에 따라 적절한 조치를 취해야 한다. (석면안전관리법 제30조의4 2항 준수) ※ 계획 검토 및 측정 방법 확인 시 부적절한 사항이 있는 경우 감리인은 시정조치사항을 발주처 및 용역업체에게 문서화하여 통보하여야 한다. ※ 실외작업의 경우 평가 결과의 “실외” 배점을 적용하여 평가하며, 이때의 총 배점은 10점으로 한다.

B.2.2. 석면해체·제거작업 관련 계획 검토 및 작업 수행 감리의 적절성

B.2.2.1. 확인기준	세부 평가 항목 (총 배점 : 2)	평가 결과
석면조사 결과서에 따른 석면해체·제거계획 수립의 적절성	석면조사 결과서 내 석면 함유 물질 종류와 양이 정확히 기재된 것을 확인한 경우	□ 1
	석면해체·제거작업 계획서와 석면조사 결과서의 석면 함유 물질 종류와 양의 일치 여부 확인	□ 1
평가 취지 및 근거
○ 감리인은 석면조사 결과서의 석면 함유 물질 종류와 양을 확인하여 석면해체·제거 대상을 명확히 하여야 한다. ○ 감리인은 석면해체·제거작업 계획서의 석면해체·제거 작업 물량이 석면조사 결과서에 따라 작성되었는지 확인하여 석면해체·제거대상을 명확히 하여야 한다. ※ 계획 검토 시 부적절한 사항이 있는 경우 감리인은 시정조치사항을 발주처 및 용역업체에게 문서화하여 통보하여야 한다.

B.2.2.2. 확인기준	세부 평가 항목 (총 배점 : 5)	평가 결과
비닐보양 전 작업장 정리와 비닐보양 계획 검토 및 이행 확인	석면해체·제거작업 계획서 내 비닐보양 전 작업장 정리와 비닐보양에 대한 계획을 적절히 검토한 경우	□ 2
	계획에 따라 비닐보양 전 작업장 정리와 비닐보양이 적절히 이루어졌는지 확인한 경우 (현장평가 시 적용 가능)	□ 3
평가 취지 및 근거
○ 감리인은 비닐보양 전 작업장 정리 및 비닐보양에 관한 계획이 적절한지 확인하여야 하며, 확인 사항은 다음과 같다. - 이동 가능한 기자재의 목록 및 보관 장소 확인 - 개구부 밀폐 - 이동 불가능한 기자재 비닐 보양 - 비닐 보양지의 두께(사양서) 및 보양의 적절성 ○ 감리인은 비닐보양 전 작업장 정리 및 비닐보양에 관한 작업이 적절한지 확인하여야 하며, 확인 사항은 다음과 같다. - 개구부 밀폐 및 비닐보양 등의 현장 사진 - 비닐보양지의 사양서와 실제 현장에서 감리인이 두께측정기를 이용하여 측정한 결괏값 ※ 계획 검토 및 작업 이행 확인 시 부적절한 사항이 있는 경우 감리인은 시정조치사항을 발주처 및 용역업체에게 문서화하여 통보하여야 한다.

B.2.2.3. 확인기준	세부 평가 항목 (총 배점 : 7)	평가 결과
위생설비 설치 계획 검토 및 운영실적	석면해체·제거작업 계획서 내 위생설비 설치 계획을 적절히 검토한 경우	□ 3
	계획에 따라 위생설비가 적절히 설치·운영되었는지 확인한 경우 (현장평가 시 적용 가능)	□ 4
평가 취지 및 근거
○ 감리인은 위생설비 설치 계획과 이에 따른 운영이 적절히 이루어지는지 확인하여야 하며, 확인 사항은 다음과 같다. - 위생설비의 구성(3단 구성: 평상복 탈의실-샤워실-작업복 탈의실) - 위생설비 내 설치해야 할 장비 및 기구 등의 적절성 - 위생설비의 설치 위치 - 적절한 위생설비의 운영 ※ 계획 검토 및 작업 이행 확인 시 부적절한 사항이 있는 경우 감리인은 시정조치사항을 발주처 및 용역업체에게 문서화하여 통보하여야 한다.

B.2.2.4. 확인기준	세부 평가 항목 (총 배점 : 2)	평가 결과
습식작업 실시 계획 검토 및 이행 여부 확인	석면해체·제거작업 계획서 내 습식작업 실시 계획을 적절히 검토한 경우	□ 1
	계획에 따라 습식작업이 적절히 실시되었는지 확인한 경우 (현장평가 시 적용 가능)	□ 1
평가 취지 및 근거
○ 감리인은 습식작업 실시 계획이 적절한지 확인하여야 한다. ○ 감리인은 계획에 따라 작업이 적절히 이루어지는지 확인해야 하며, 확인 사항은 다음과 같다. - 현장 작업자의 습윤제 살포 작업에 대한 현장 촬영 사진 - 감시창 또는 작업장 내부에서 확인한 날짜와 시간, 장소를 기록한 감리 확인 자료 ※ 계획 검토 및 작업 이행 확인 시 부적절한 사항이 있는 경우 감리인은 시정조치사항을 발주처 및 용역업체에게 문서화하여 통보하여야 한다.

B.2.2.5. 확인기준	세부 평가 항목 (총 배점 : 3)	평가 결과
작업 후 위생설비 및 밀폐시트 제거의 적절성	사용된 위생설비 및 밀폐 시트가 적절히 처리되었는지 확인한 경우	□ 3
평가 취지 및 근거
○ 감리인은 사용된 위생설비와 밀폐 시트를 습윤화하여 폐기물관리법에 따라 적절히 처리되었는지 확인하여야 한다. 이때 감리인은 문서, 사진 등 증빙자료를 작성하여야 한다. ※ 평가 시점 당시 해체작업 진행 중으로 위생설비 및 밀폐시트 제거 시점이 아닌 경우 점수를 기본적으로 부여한다. ※ 작업 이행 확인 시 부적절한 사항이 있는 경우 감리인은 시정조치사항을 발주처 및 용역업체에게 문서화하여 통보하여야 한다.

B.2.2.6. 확인기준	세부 평가 항목 (총 배점 : 6)	평가 결과
음압기 배치 및 음압의 확인 방법 계획 수립 및 이행 확인	석면해체·제거작업 계획서 내 음압기 배치 및 음압 확인 계획에 대해 적절히 검토한 경우	□ 3
	계획에 따라 음압기 배치 및 음압 유지가 적절히 이루어지는지 확인한 경우 (현장평가 시 적용 가능)	□ 3
평가 취지 및 근거
○ 감리인은 읍압기 배치 및 음압 확인 계획을 검토하여야 하며, 확인 사항은 다음과 같다. - 음압기 대수 및 산출 근거 - 작업장별 음압기의 배치 위치 및 배출구의 위치 - 음압의 확인 방법 ○ 감리인은 계획에 따라 작업이 적절히 이루어지는지 확인해야 하며, 확인 사항은 다음과 같다. - 작업장별 음압기의 배치 위치 및 배출구의 위치를 확인할 수 있는 기록과 현장 사진 - 측정날짜, 측정 위치, 측정 시간, 측정 횟수가 포함된 음압 측정 관련 자료 ※ 실외작업의 경우 아래 기준으로 평가한다. - 확인기준: 건물 주변 비닐시트의 주기적 관리 계획 수립 및 이행 확인 - 세부 평가 항목 (총 배점: 6) · 석면해체·제거작업 계획서 내 건물 주변 비닐시트의 주기적 관리 계획에 대해 적절히 검토한 경우 (배점: 3) · 계획에 따라 건물 주변 비닐시트의 주기적 관리가 적절히 이루어지는지 확인한 경우 (현장평가 시 적용 가능) (배점: 3) - 평가 취지 및 근거: 감리인은 건물 주변 비닐시트의 주기적 관리 계획을 검토하여야 하며, 계획에 따라 작업이 적절히 이루어지는지 확인하여야 한다. ※ 계획 검토 및 작업 이행 확인 시 부적절한 사항이 있는 경우 감리인은 시정조치사항을 발주처 및 용역업체에게 문서화하여 통보하여야 한다.

B.2.3. 일별 감리 업무수행의 적절성

B.2.3.1. 확인기준	세부 평가 항목 (총 배점 : 5)	평가 결과
작업계획서상 일별로 이루어지는 작업의 이행 확인	해당 작업 구역의 석면 함유 물질 종류 및 양 일별 확인 여부 (현장평가 시 적용 가능)	□ 2
	해당 작업 투입 인원 및 장비의 일별 확인 여부 (현장평가 시 적용 가능)	□ 3
평가 취지 및 근거
○ 감리인은 석면조사 결과서에 근거하여 일별로 해당 작업 구역의 작업이 이루어지는지 확인한다. (석면 함유물질 종류와 양의 일별 확인 갈음) ○ 감리인은 해당 작업에 투입되는 인원(작업자)의 수를 일별로 확인하여야 한다. 또한 투입된 장비 목록 및 수량을 일별로 확인하고, 장비 배치 사진을 기록해야 한다. ※ 작업 이행 확인 시 부적절한 사항이 있는 경우 감리인은 시정조치사항을 발주처 및 용역업체에게 문서화하여 통보하여야 한다.

B.2.4. 근로자 보호 조치, 작업 안내 계획 검토와 이행 확인

B.2.4.1. 확인기준	세부 평가 항목 (총 배점 : 5)	평가 결과
근로자 보호 조치, 작업 안내 계획과 이행 확인	작업자의 특수건강검진·교육 이행, 투입 인력 명단 확인	□ 1
	개인보호구 지급 및 관리 계획 검토	□ 1
	개인보호구 지급 및 관리 이행 확인 (현장평가 시 적용 가능)	□ 1
	표지판 및 안내판 설치 계획 검토	□ 1
	표지판 및 안내판 설치 이행 확인 (현장평가 시 적용 가능)	□ 1
평가 취지 및 근거
○ 감리인은 석면해체작업 시작 전에 작업자의 특수건강검진·교육 이행 여부를 확인하고, 작업자의 서명이 포함된 작업 투입인력 명단을 확인하여야 한다. ○ 감리인은 석면해체·제거작업 계획서 내의 작업자 개인보호구 지급, 관리 계획을 검토하고, 이를 적절히 이행하였는지 확인하여야 한다. ○ 감리인은 표지판 및 안내판 설치 계획과 이행 여부를 확인하여야 한다. 확인 사항은 다음과 같다. (산업안전보건기준에 관한 규칙 제490조 및 석면안전관리법 시행규칙 제37조 2항 준수) - 위치, 규격, 기간

B.2.5. 석면 함유 물질 처리 계획 검토 및 이행 확인

B.2.5.1. 확인기준	세부 평가 항목 (총 배점 : 3)	평가 결과
지정폐기물(석면)의 반출·임시 보관·배출 계획과 이행 확인	지정폐기물(석면)의 반출·임시 보관·배출 계획을 적절히 검토한 경우	□ 1
	계획에 따라 지정폐기물(석면)의 반출·임시 보관·배출이 적절히 이루어지는지 확인한 경우 (현장평가 시 적용 가능)	□ 2
평가 취지 및 근거
○ 감리인은 지정폐기물(석면)의 반출·임시 보관·배출 계획을 검토하여야 하며, 확인 사항은 다음과 같다. - 반출 전 표면의 석면분진 제거와 전용 폐석면 반출구를 통한 반출 - 임시 보관 및 배출의 적절성 (폐기물관리법 시행규칙 별표5 준수) - 폐기물처리업체 정보 ○ 감리인은 계획에 따라 지정폐기물(석면)의 반출·임시 보관·배출·처리가 적절히 이루어지는지 확인하여야 하며, 지정폐기물(석면)이 최종 처리됨을 확인하여야 한다. 확인 사항은 다음과 같다. - 지정폐기물 보관표지 및 임시 보관 사진 - 계량증명서 - 인계내역서 - 폐기물수집운반(처리)확인서

B.2.5.2. 확인기준	세부 평가 항목 (총 배점 : 2)	평가 결과
잔재물 조사·처리 계획 및 이행 확인	잔재물 조사·처리 계획을 적절히 검토한 경우	□ 1
	계획에 따라 잔재물 조사·처리가 적절히 이루어진 경우	□ 1
평가 취지 및 근거
○ 감리인은 잔재물 조사, 처리 계획을 검토하여야 하며, 확인 사항은 다음과 같다. - 잔재물 조사 방법(조사 장비, 사진 촬영, 시료 채취, 조사표 작성 등에 관한 내용 기재) - 잔재물 처리 방법(폐기물관리법에 따른 적절한 처리 필요) ○ 감리인은 계획에 따라 잔재물 조사, 처리가 적절히 이행되었는지 확인해야 한다. ※ 평가 시점 당시 해체작업이 진행 중으로 잔재물 조사 시점이 아닌 경우 해당 항목의 평가점수는 기본적으로 부여한다.

B.2.6. 석면해체작업감리 배치 및 수행계획 수립의 적절성

B.2.6.1. 확인기준	세부 평가 항목 (총 배점 : 2)	평가 결과
석면해체작업감리인 지정·변경지정의 적절성	석면해체작업감리인 지정·변경지정이 적절히 이루어진 경우	□ 2
평가 취지 및 근거
○ 감리인은 석면안전관리법 시행규칙 제41조의2제1항 및 제2항에 따른 감리인 지정·변경지정 사항이 발생한 경우 신고가 적절하게 이루어졌는지 확인하여야 한다.

B.2.6.2. 확인기준	세부 평가 항목 (총 배점 : 3)	평가 결과
감리원 적정 배치 및 수행계획의 적절성	석면해체작업 감리 수행계획서 내에 감리원의 배치 및 업무수행 계획이 수립된 경우	□ 2
	석면해체작업 감리 수행계획서 내에 배치 감리원에 대한 일별 장비 지급 계획이 수립된 경우	□ 1
평가 취지 및 근거
○ 감리인은 석면해체작업 감리 수행계획을 수립하여야 하며, 확인 사항은 다음과 같다. - 감리원 배치 장소 - 감리원 상주 장소 - 배치 감리원의 일별 업무수행계획 - 배치 감리원에 대한 일별 장비 지급 계획

B.2.7. 석면해체작업 감리완료보고서 작성·보고의 적절성

B.2.7.1. 확인기준	세부 평가 항목 (총 배점 : 5)	평가 결과
석면해체작업 감리완료보고서 작성·보고의 적절성	석면해체작업 감리완료보고서 작성 및 보고가 적절히 이루어진 경우 (감리원 적정 배치 확인 포함)	□ 5
평가 취지 및 근거
○ 감리인은 환경부 고시 제2020-84호「석면해체작업 감리인 기준」 제5조에 따른 석면해체·제거작업 감리완료보고가 적절히 이루어지는지 확인하여야 한다. ※ 평가 시점 당시 해체작업 진행 중으로 감리완료보고서가 제출되지 않은 경우는 아래의 현장평가 기준으로 작업한다. - 확인 기준: 감리원 상주 여부 확인 및 수행사항 확인 - 세부 평가 항목 (총 배점: 5) · 감리원 상주 장소 및 감리 수행계획서의 비치가 적절한 경우 (배점: 2) · 상주 감리원의 보유 장비가 적절한 경우 (배점: 1) · 상주 감리원의 일일 감리일지가 적절히 작성되고 있는 경우 (배점: 2) - 평가 취지 및 근거: 감리인이 감리 수행계획서에 따라 적절히 감리업무를 수행하고 있는지 확인한다.

C. 업무수행성과

C.1. 감리실적 및 행정처분이력

C.1.1. 감리실적

C.1.1.1. 확인기준	세부 평가 항목 (총 배점 : 5)	평가 결과
감리실적	감리실적 건수	□ 5
평가 취지 및 근거
○ 감리실적 평가는 직전 평가 이후 금회 평가 시까지의 실적 건수를 반기 수로 나누어 산정하며, 이때 최고점은 5점으로 한다. - 5건 이상인 경우: 5점 - 2.5건 이상 5건 미만인 경우: 4점 - 1.5건 이상 2.5건 미만인 경우: 3점 - 0.5건 이상 1.5건 미만인 경우: 2점 - 0.5건 미만인 경우: 1점 ※ (예시) 평가 기간 2년 동안의 실적은 4반기로, 1년 6개월 안에 평가시는 3반기로 적용한다.

C.1.2 행정처분이력

C.1.2.1 확인기준	세부 평가 항목 (총 배점 : 5)	평가 결과
행정처분이력	시정명령 이력이 없는 경우	□ 2
	영업정지 및 등록취소 이력이 없는 경우	□ 3
평가 취지 및 근거
○ 감리인의 행정처분이력에 대해 확인하여 평가한다.